2026년 1차 및 2026년 공동1차 타당성조사 위탁사업

2026년 1차 지방재정투자사업 타당성조사가 의뢰된 사업 중 외부위탁이 필요한 사업에 대하여 부문별로 위탁사업을 결정하여 조사사업을 수행하고자 함

1. 2026년 1차 및 2026년 공동1차 타당성조사 사업별 외부위탁 필요 부문

※금액이 기재된 과제만 재공고에 해당

번호	분야	광역	기초	사업명	모집부문 금액 및 기간
					수요 및 편익 추정 (만원)	기술적 검토 및 비용 추정 (만원)	외부위탁 과업기간 (개월)
1	문화	서울	동작구	서울 (가제) 동작 OOO 수익형 민간투자사업	-	-	-
2	녹지·공원	대구	본청	대구 앞산공원 추가조성 사업	-	-	-
3	체육	경기	본청	경기도 선수촌 건립 사업	-	-	-
4	교육	경기	의회	경기도의회 의정연수원 건립 사업	2,500	-	6
5	환경	강원	춘천시	강원 춘천시 순환형 매립시설 정비사업	-		-
6	지역개발	충북	음성군	충북 음성군 감곡역세권 도시개발사업	-	-	-
7	사회복지	경북	포항시	경북 포항 추모공원 건립사업	1,000	-	4
8	녹지·공원	경북	경주시	경북 경주 동천~황성 도시숲 조성사업	-	-	-
9	지역개발	경북	영주시	경북 영주시 가흥신도시~세무서사거리 도시계획도로 개설공사	-	2,500	5
10	지역개발	경북	고령군	경북 고령 곽촌지구 도시개발사업	-	-	-
공동	교육	전남	강진군	전남 강진군 (가칭)전라남도교육청 다산학생수련원 건립사업	-	-	-

※ 과업기간은 약정기관의 요청에 따라 중지 및 연장되는 경우 달라질 수 있음.

※ 조사사업별 사업 개요 : 붙임-1. 사업개요 참조

※ 붙임-2. 과업지시서 참조

[붙임-1. 사업 개요]

01) (서울 동작구) (가제) 동작 OOO 수익형 민간투자사업(마감)

구분	내용
사업추진 주체	◦ 서울특별시 동작구
사업목적	◦ 동작구에 대형공연장을 건립하여 동작을 넘어 서울을 대표하는 문화장소를 건립하고자 함
사업 추진 근거	◦ ｢문화예술진흥법」, 「공연법」 등
사업 내용	◦ 사업량 : 부지면적 5,571㎡, 연면적 27,584.66㎡(지하4층/지상7층) ◦ 건설기간 : 2027. 3. 1. - 2029. 12. 31.(34개월) - 공연장, 임대시설 등
총사업비	◦ 1,931억원 - 공사비 1,243억원, 용역비 84억원, 시설부대비 110억원, 운영설비비 109억원, 기타 62억원 등

02) (대구 본청) 대구 앞산공원 추가조성사업(마감)

구분	내용
사업추진 주체	◦ 대구광역시 본청
사업목적	◦ 일몰제(’20. 7월)에 대비한 장기미집행 공원을 체계적으로 개발하여 난개발을 억제하고 쾌적한 도시환경을 조성하여 시민휴식 공간으로 제공하고자 함
사업 추진 근거	◦ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조, 제91조, 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제19조
사업 내용	◦ 부지면적 : 532,347㎡ ◦ 토지보상 및 시설공사기간 : 2020년 10월 ~ 2027년 6월 (6년 8개월)
총사업비	◦ 845억원(시도비 484억원, 지방채 361억원) - 공사비 0.62억원, 보상비 840억원, 시설부대경비 4.38억원

03) (경기 본청) 경기도 선수촌 건립 사업(마감)

구분	내용
사업추진 주체	◦ 경기도 본청
사업목적	◦ 경기도청 직장운동경기부 전용 훈련시설을 건립하여 선수들이 안정적인 환경에서 훈련에 전념할 수 있도록 하고, 도민 관심이 낮고 선수층이 취약한 비인기 종목의 저변 확대와 스포츠 복지 향상을 도모하고자 본 사업을 추진함
사업 추진 근거	◦ ｢스포츠기본법｣ 제10조(전문스포츠에 관한 시책), ｢국민체육진흥법｣ 제13조(체육시설의 설치 등), ｢경기도 체육진흥조례｣ 제18조(전문체육의 진흥)
사업 내용	◦ 부지면적 : 18,326㎡(수원월드컵경기장 전체 부지면적 411,908㎡ 중 일부) ◦ 건축면적 : 14,000㎡ ◦ 연 면 적 : 25,500㎡(지하1층∼지상2층) - 선수 숙소, 훈련시설, 식당, 의료·지원시설 등으로 구성된 복합 선수촌
총사업비	◦ 1,204억원(전액 도비, 용지보상비 제외) - 공사비 982억원, 시설부대비 113억원, 예비비 109억원

04) (경기도 의회) 경기도의회 의정연수원 건립 사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ 경기도 의회
사업목적	◦ 자치분권 강화로 지방의회의 역할과 책임이 확대됨에 따라, 외부기관에 분산된 기존 교육체계의 한계를 보완하고 의정활동에 특화된 전문 교육·연수 인프라를 구축하고자 하는 사업임
사업 추진 근거	◦ 「지방자치법」
사업 내용	◦대지면적 : 29,185㎡(현, 고대산 연천 베이스볼파크) ◦연면적 : 45,014.04㎡(지하2층~지상4층) - 교육연수공간(11,703.46㎡(26.00%) : 강의실, 시청각실, 컴퓨터실, 세미나실 등 - 휴식공간(20,396.79㎡(45.31%) : 숙박시설 2인실 192실, 4인실 18실 - 지역소통공간(12,913.78㎡(28.69%) : 명상실, 사우나, 도서관, 강당, 실내체육관, 주차장 - 주차대수 : 192대(법정 117.4대) ◦ 건설기간 : 2028년 04월 ～ 2030년 6월(2년2개월)
총사업비	◦ 1,630억원(전액시비) - 공사비 1,299억원, 보상비 25억원, 시설부대비 132억원, 운영설비비 27억원, 예비비 148억원

05) (강원 춘천시) 강원 춘천시 순환형 매립시설 정비사업(마감)

구분	내용
사업추진 주체	◦ 국가(보조), 춘천시
사업목적	◦ 춘천시의 순환형 매립시설을 정비하여 기존 매립시설 용량 부족에 대응하고, 증가하는 생활폐기물을 처리하기 위함
사업 추진 근거	◦ ｢폐기물관리법｣ 제4조 ◦ ｢폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관련 법률｣ 제1조
사업 내용	◦ 사업 위치 : 강원특별자치도 춘천시 신동면 혈동리 산235-1번지 일원 ◦ 사업 규모 : 매립지 정비 768,135㎥ - 매립지 조기 안정화, 매립폐기물 굴착, 선별, 재활용 및 처리 순서로 순환이용 ◦ 건설 기간 : 2027년 7월 ～ 2030년 12월 (3년 6개월) ◦ 운영 기간 : 2031년 1월 ~ 2062년 12월(32년)
총사업비	◦ 531.61억원(국비 255.18억원, 도비 76.55억원, 시비 199.88억원) - 공사비 438.5억원, 시설부대경비 44.78억원, 예비비 48.33억원

06) (충북 음성군) 충북 음성군 감곡역세권 도시개발사업(마감)

구분	내용
사업추진 주체	◦ 충청북도 음성군 및 충북개발공사
사업목적	◦ 중부내륙 고속철도 감곡장호원역 개통에 따라 주변 인프라와 연계한 체계적·효율적 도시개발을 통해 공공 및 생활편익시설을 확충하고 쾌적한 주거환경을 조성하기 위해 추진하는 사업임
사업 추진 근거	◦ 「도시개발법」
사업 내용	◦ 사업위치 : 충청북도 음성군 감곡면 왕장리 일원 ◦ 사업기간 : 2028년 3월~ 2030년 12월(2년 10개월) ◦ 사업규모 : 대지면적 126,739㎡(주거 82,460㎡, 공공업무 13,472㎡, 도시기반 30,807㎡)
총사업비	◦ 857억원(공사비 184, 보상비 540, 시설부대경비 25, 기타 29, 예비비 78)

07) (경북 포항시) 경북 포항 추모공원 건립사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ 경상북도 포항시
사업목적	◦ 포항시의 화장률 증가 및 시설 노후화, 예비 화장로의 부재 및 시설 기능 저하 등의 문제를 해결하고자 추진 계획됨
사업 추진 근거	◦ 「장사 등에 관한 법률」 제1조, 제4조, 제13조 등
사업 내용	◦ 부지면적 70,000㎡, 연면적 9,723.14㎡ (지하 1층 ~ 지상 2층) - 장례시설 2,087.25㎡, 화장시설 4,974.83㎡, 봉안당 2,661.06㎡ - 빈소 5개소, 화장로 8기, 봉안시설 20,000기, 자연장지 60,000기, 유택동산 1개소 ◦ 사업기간 : 건설 2028년 ~ 2030년(3년), 운영 2031년 ~
총사업비	◦ 833억원(국비 121억원, 도비 26억원, 시비 686억원) - 토지조성비 86.77억원, 건축공사비 575.22억원, 화장로 설치비 32억원, 설계·감리비 29.16억원, 부대공사비 34.20억원, 예비비 75.73억원

08) (경북 경주시) 경북 경주 동천~황성 도시숲 조성사업(마감)

구분	내용
사업추진 주체	◦ 경주시
사업목적	◦ 2022년 1월 폐선된 동해남부선 주변 완충녹지(건고 제285호, 87. 6. 22.) 중 주거지역의 밀집과 인구 집중 등으로 실효 후 난개발이 예상되는 구간에 대해 도시 숲 조성사업을 시행함으로써 시민의 안전을 확보하고 동해 남부선 폐선 이후 지역민을 위한 공공 녹지공간으로 활용하고자 추진중인 사업임
사업 추진 근거	◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」
사업 내용	◦ 사업위치 : 경상북도 경주시 동천동, 용강동, 황성동 일원 ◦ 사업기간 : 2027년 6월 ～ 2029년 8월(2년 3개월) ◦ 사업규모 : 부지면적 : 136,900㎡(L = 2.5㎞, B = 50∼55m) 건축면적 : 19,208㎡(카페테리아, 키오스크 카페, 정원온실, 생태학습원 등)
총사업비	◦ 1,726억원(국비 85억원, 도비 25.5억원, 시비 915.35억원, 지방채 700억원)

09) (경북 영주시) 경북 영주시 가흥신도시~세무서사거리 도시계획도로 개설공사

구분	내용
사업추진 주체	◦ 경상북도 영주시
사업목적	◦ 본 사업은 가흥신도시에서 세무서사거리간 도시계획도로를 개설하여 영주시내 구도심과 신도심의 균형발전 도모 및 영주교로 집중되는 교통량을 분산시켜 지역 교통 환경을 개선하고자 추진하는 사업임
사업 추진 근거	◦ ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제30조(도시·군관리계획의 결정)
사업 내용	◦ 사업량 : 도로확장 L=1.06km (교량 L=260m) - 양방향 4차로 B=20.0m, 설계속도 40km/h ◦ 건설기간 : 2027년 3월 ～ 2032년 3월(5년 1개월)
총사업비	◦ 594억원(전액시비) - 공사비 350.92억원, 보상비 175.51억원, 시설부대비 39.33억원, 예비비 28.29억원

10) (경북 고령군) 경북 고령 곽촌지구 도시개발사업(마감)

구분	내용
사업추진 주체	◦ 경상북도 고령군
사업목적	◦ 행정구역 전체의 45%가 개발제한구역으로 낙후 지역에 해당하는 다산면의 정주여건 개선 및 도시기능 향상, 계획적 토지이용 도모
사업 추진 근거	◦ ｢도시개발법｣
사업 내용	◦ 사업량 : 부지면적 262,917㎡(1,907세대) - 주거용지: 153,641㎡(58.4%), 기반시설용지(도로, 공원 등): 109,276㎡(41.6%) ◦ 사업기간 : 2026년 ~ 2034년(9년)
총사업비	◦ 2,140억원(군비 1,890억원, 지방채 250억원) - 공사비 526억원, 보상비 704원, 시설부대비 264억원, 부담금 436억원, 금융비용 210억원

공동) (전남 강진군) 전남 강진군 (가칭)전라남도교육청 다산학생수련원 건립사업(마감)

구분	내용
사업추진 주체	◦ 전라남도 강진군청/ 전라남도 교육청
사업목적	◦ 기존 6개 수련장(월출,유달,송호,지리산,나로도,백운)의 시설 노후화로 인한 이용률 저조, 소규모 수련장을 대규모 수련원으로 재편하고, 수련시설을 현대화하여 융복합 수련 활동이 가능한 다목적 종합수련시설로 전환하고자 함
사업 추진 근거	◦ 「지방교육자치에 관한 법률 제32조(교육기관의 설치)」, 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」, 「초중등교육법 제23조(교육과정 등)」, 「초중등교육법 시행령 제48조(수업운영방법 등)」
사업 내용	◦ 사업위치 : 전라남도 강진군 신전면 벌정리 산33번지 일원 ◦ 사업기간 : 건설기간 2029년 1월 ～ 2030년 12월(2년) 운영기간 2031년 3월 ~ ◦ 사업규모 : 부지면적 150,165㎡, 연면적 59,500㎡ (지하2층/지상4층) - 주요 시설 : 수련관(생존·레저). 다목적대강당. 컨퍼런스 홀, 생활관, 글로컬미래관, 교육관(컴퓨터실), 야외 주차장(총 193대)
총사업비	◦ 2,471.43억원(시군구비 132억원, 기타(전라남도 교육청) 1,692.94억원) - 공사비 1,985.2억원, 보상비 20억원, 시설부대비 241.56억원, 예비비 224.67억원